#.

1. 사업 개요

사업명

키르기즈 공화국 지방 상수도 및 위생시설 개선 사업

사업기간

2022-2023년

총괄기관

한국개발연구원

대상국

키르기즈 공화국

협력부처

건축, 건설, 주택 및 공공서비스청

사업배경

◦ (국가적 배경) 상수도 시스템의 노후화 및 위생시설의 도시집중화로 인해 전체 키르기즈 공화국 가구의 29.1%만 중앙 상수도를 통한 식수 접근이 가능하며, 지방의 경우 총 인구의 13.4%만이 위생 시설 접근성을 보유

◦ (정책적 배경) 식수공급은 “2018-2040 키르기즈 공화국 지속가능한 국가 개발 정책” 내 명시된 주요 국가 목표 중 하나로, 키르기즈 수자원청은 지방 상수도 및 위생시설 개선을 통해 지방 원활한 식수공급 및 위생수준 향상을 위해 자문을 요청함.

- (협력부처) 키르기즈 공화국 정부는 2020년 식수 공급 및 위생시설 제공을 위한 투자와 지원을 가속화하기 위해 수자원청을 신설함.

목적

◦ 지방 상수도 및 위생시설 개선을 통한 지방 내 원활한 식수공급 및 키르기즈 공화국 위생 수준과 삶의 질 향상에 기여

산출물

(Output)

◦  키르기즈 공화국 지방 상수도 및 위생시설의 개선을 위한 정책권고안

◦  정책 네트워크 및 컨센서스 향상을 위한 면담결과 보고서

◦  정책 세미나, 보고회, 방한 연수 발표자료 및 결과 보고서

◦  정부 이해광계자 지식 향상 및 고위급의 정책제언 이행의지 제고

기대성과

(Outcome)

◦ 키르기즈 공화국 상수도 및 위생시설 개발 및 건설과 관련한 한국기업 진출, 한국 정부 또는 국제기구와의 후속사업 연계

2. 사업 구성 및 수행 계획

사업구성

및

주요활동

◦ (공동연구) 키르기즈 공화국 상수도 및 위생시설에 대한 현황 조사, 발전 제약 요소 분석, 관련 한국경험 사례 조사

- (세부주제1) 3개 주(Jalalabad, Issyk-Kul, Chui Oblasts)를 분석 대상으로 한 지방 상수도 갭 분석

- (세부주제2) 한국의 상수도 및 위생시설 개선 경험 사례연구

- (세부주제3) 상수도 및 위생시설 정책 및 인프라 개선 갭 분석과 실행계획 수립

◦ (역량강화연수) 주제별 관련 한국 기관 방문 및 강연을 통해 정책실무자의 역량제고

- K-Water, 한국환경공단, 국가물관리위원회, 한국상하수도협회, 한국물기술인증원

◦ (정책자문 및 보고서 발간) 고위정책결정자 및 정책실무자를 대상으로 자문 제공, 최종 정책자문보고서 발간 및 협력국 전달

모니터링

및 평가

◦ (자문평가위원회) 주제별·지역별 전문가를 자문평가위원으로 위촉, 사업과정 및 결과물에 대한 자문·평가

◦ (설문조사) 주요단계별 협력국 관계자의 지식의 향상, 정책제언 이행의지 제고 여부 조사

◦ (종료평가) 사업 종료 시 협력국 관계자 대상으로 설문 및 인터뷰를 실시, 사업추진경과, 최종결과물에 대한 종합평가 실시

3. 성과 관리 계획

성과 지표

분류	구분	성과지표 (Indicator)	실적 및 목표치					자료수집 방법 또는 자료 출처
			2021	2022	2023	2024	`2025
산 출물 (Output)	지식공유	키르기즈 공화국 지방 상수도 갭 분석 보고서 완성률(%)	50%	100%	-	-	-	KSP 정책자문보고서
		한국의 상수도 및 위생시설 개선 경험 사례연구 보고서 완성률(%)	50%	100%	-	-	-
		상수도 및 위생시설 정책 및 인프라 개선 갭 분석과 실행계획 수립 보고서 완성률(%)	50%	100%	-	-	-
	정책 네트워크 구축	정책 네트워크 및 컨센서스 향상을 위한 유관부처/기관 면담 횟수	4회	4회	-	-	-	사업종료보고서 /종료평가보고서
		정책 세미나 및 보고회 개최 횟수	2회	2회	-	-	-	사업종료보고서 /종료평가보고서
	정책결정자 역량강화	협력국 정책결정자 지식 향상 관련 설문항목 평균 점수	80%	80%	-	-	-	설문지 (중간/종료 설문, %)
		협력국 고위 관계자의 정책제언 이행의지 제고 관련 설문항목 평균 점수	80%	80%	-	-	-	설문지 (중간/종료 설문, %)
단기/중장기 성과 (Outcome)	정책형성	수자원청 내 상수도 및 위생시설 개선 및 구축을 위한 정책/제도 개선 논의 여부	-	-	O	-	-	성과 모니터링 결과보고서 (사업종료이후)
	정책도입	상수도 및 위생시설 개선안 마련 여부	-	-	-	-	O
	후속사업 연계	국내 및 협력국 공공·민간 기관 간 후속 활동/사업 연계 여부(MOU 등)	-	-	O	-	-

성과 촉진 방안

◦ 방한연수와 연계하여 협력국 정책현황 및 진출기회를 국내 유관부처 및 민간기업 관계자들에게 공유하여 협력국에 대한 이해도를 증진하고, 후속사업 연계 및 기업진출 촉진

4. 위험 관리 계획

위험요소 분석 및 관리계획

◦ (연구 범위) 주제 1 키르기즈 공화국 지방 상수도 갭 분석에 있어 요청해온 3개 주를 대상으로 할 경우 사업 범위가 너무 클 수 있으므로, 현지측과 사전협의를 통해 대상을 조정할 필요가 있음.

키르기즈 공화국 지방 상수도 및 위생시설 개선 사업